가축분뇨 지역단위 통합관리센터

자원화 시범사업 기술공모(시스템)

2013. 11. 20.

가축분뇨 지역단위 통합관리센터

시범사업 추진사업단

목            차

1. 사업개요․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
2. 공모개요 및 방법․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
3. 제안서류 접수 및 제출․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
4. 제출도서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
5. 공사비 산출 기준․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
6. 기술제안공모 계획원칙․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
7. 평가 및 제안기술 선정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	7
8. 기 타․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	14
9. 각 종 서 식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	18

	가축분뇨 지역단위 통합관리센터 시범사업
샘골농협	기술제안공모

※ 본 공모는 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업의 적합한 기술 선정을 위해 샘골농업협동조합에서 추진하는 것으로 시스템과 건축을 포함하여 아래와 같이 공고합니다.

1. 사업개요

가. 목 적

○ 농업과 축산, 농촌 환경이 공존 공생 할 수 있는 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 사업의 주요시설에 적합한 기술 선정을 목적으로 함.

나. 개 요

명 칭	예상 사업위치	부지면적 (㎡)	시설용량 (ton/일)	주요내용	예상 공사비	공모방법
가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업	전북 정읍시 정우면 우일리 산18-1번지	36,904 (11,163평)	축분75 액비20	퇴.액비화 ( 100% )	70억원	건축.토목, 시스템 일괄공모

다. 범 위

1) 시간적 범위 : 추진일정계획 참조(page 2)

2) 공간적 범위 : 예상 사업장 위치 참조

3) 계획적 범위 : 요구사항 참조 (별표 1)

4) 구성안 범위 :

⦁기계설비 : 자원화시설 구성, 물질수지, 생산량 예측, 시스템 계산서, 운영인력 계획,

경제성분석, 시스템 평면도, 단면도, 시스템 계통도,

⦁건축 : 기본도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도등),

⦁총 공사 가격제안서(가축분뇨 퇴.액비화처리시스템과 건축.토목을 분리하여 제안)

2. 공모개요 및 방법

가. 관련지침

○ 이 지침은 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률(이하 ‘가축분뇨법’이라 한다)」

제3조 및 제23조,제25조,제24조의 규정에 의하여 설치를 추진하고 있거나 운영중

인 가축분뇨공공처리시설의 관리에 적용하되, 가축분뇨공공처리시설의 설치․개선에

따른 국고보조금 관련사항에 대하여는「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」을 우선

적용한다.

※ 환경부 : 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업 지침

나. 기술제안공모의 방법

1) 일반공개

2) 응모자 등록 시 참가자의 자격기준에 적합한자에 한해 제안서 제출

다. 추진일정계획

1) 공 모 공 고 : 2013년 11월 20일

2) 응모자 등록기간 : 2013년 11월 21일 09:00 ~11월 27일 17:00까지(평일만접수)

3) 질의서 접수 마감기한 : 2013년 11월 21일~11월 22일  17:00까지

4) 질의 답변일 : 2013년 11월 25일

5) 제안서 접수 기간 : 2013년 11월 25일 ~ 12월 06일 17:00까지(평일만접수)

6) 제안기술 평가 : 2013년 12월 06일 ~ 12월 18일 예정

○ 1차 (서류평가) : 2013년 12월 06일 ~ 12월 13일 예정

※ 1차 평가결과 상위 1~3순위 업체만  2차,3차 평가대상임.

○ 2차 (현장평가) : 2013년 12월 10일 ~ 12월 18일 예정

○ 3차 (발표평가) : 2013년 12월 10일 ~ 12월 18일 예정

※ 2차 (현장평가)와  3차 (발표평가) 동시 진행예정

7) 기술공모 선정 추천 : 3차 발표평가 후

8) 제안기술 선정 및 발표 : 기술공모 선정 추천일 익일(샘골농협 홈페이지에 등재)

※ 단, 상기 일정은 추후 변경될 수 있음(변경사항 발생 시 응모자에게 FAX 전송),

접수마감기한 이후의 일정(발표평가 장소 등)은 별도 통보함.

라. 기술공모 참가자의 자격

1) 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 가능업체로써 다음의 시스템 및 설치능력을 확보하고 있는 자

1. 가축분뇨 자원화 시설 설계․시공자격 업체

- 『가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률』 제34조에 따른 설계․시공업 등록한 자

- 『환경기술개발 및 지원에 관한 법률』 제15조에 따른 수질분야 환경전문공사 사업자로 등록한 자

- 『건설산업기본법』 제7조 및 제9조, 법 시행령 제7조에 따른 산업․환경설비공사 건설업 등록한 자 등

2. 상기 1항중 1개 이상에 해당하고, 가축분뇨 퇴비화 시설로 l일 50톤이상 및 액비화시설 1일 20톤이상 가동실례가 1건 이상, 1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출할 수 있는 자. 단, 액비 단일시공실적은 제외

※ 가축분뇨 처리시설 관련 농림부 기술평가 등록된 업체에 한하여 본 기술공모에 참가할

수 있다.

2) 상기1)항의 기술공모 참가자격을 갖춘 가축분뇨퇴비화시설의 공법사가 건축면허가 없어, 건축업체[건설산업 기본법에 의한 건축공사업(또는 토목건축공사업) 등록을 한자]와 공동으로 공모에 참가할 경우 1개의 참가자로 본다.(공동이행방식) 이 경우 가축분뇨퇴비화시설의 공법사가 공동 응모의 대표자로 한다.

마. 기술제안공모 응모 등록처

1) 응모자 등록일 : 2013년 11월 21일 09:00 ~11월 27일 17:00까지(평일만접수)

※ 등록은 매일 09시부터 17시까지 받음(토요일 및 법정공휴일 제외)

2) 응모 등록처 : 전북 정읍시 정우면 정신로 616번지(정읍시 정우면 초강리550-5번지)

샘골농업협동조합 2층

3) 주 관 부 서 : 샘골농협(가축분뇨 지역단위 통합관리센터 시범사업 추진사업단)

TEL : 063)537-9079,   FAX : 063)537-9095

4) 응 모 방 법 : 방문

바. 응모자 구비서류

○ 본 기술제안공모에 응모하고자 할 경우 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) 공통사항

○ 기술제안공모 응모신청서(서식 #1) 1부.

○ 대표자 선임계(서식 #2) 1부.

2) 참가자격 증빙서류

○ 가축분뇨자원화시설 설계․시공자격

- 가축분뇨자원화시설 설계․시공 등록증 사본

- 환경전문공사업 등록증 사본

- 산업․환경설비공사 등록증 사본

- 그 외 위와 상응하는 등록증 사본(관련 법규 근거 첨부)

○ 건설산업기본법에 의한 건축공사업(또는 토목건축업)자격

- 건설업등록증 사본

○ 가축분뇨자원화시설 시공․운전 실적증명서(양식 1) 1부

○ 사업자 등록증 사본 1부

○ 국세·지방세 완납증명서 1부

○ 2012년도 재무제표 1부(공인회계사확인 세무보고용 재무제표)

○ 법인인감증명서 1부

○ 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용시)

○ 기타 : 공동응모자의 경우에는 상기 해당 서류를 각각 제출하여야 한다.

3) 응모신청자 구비서류 미비가 있을 경우 본 공모에 접수할 수 없음.

사. 질의응답

1) 본 기술제안공모에 관하여 질의 사항이 있을  경우 반드시 서면으로 질의하며, 답변 내용은 일괄 샘골농협 홈페이지에 게시 통보함.

2) 질의방법은 기술제안공모 서면질의서(서식 #3)에 의해 작성하고, 질의기간은 질의서 접수 마감기한까지 도달한 우편물 또는 모사전송(FAX)에 한한다. (모사전송은 접수사실을 담당자에게 구두 확인하여야 한다.)

3) 질의서에 대한 답변사항은 본 기술제안공모문과 동일한 효력을 갖는다.

3. 제안서류 접수 및 제출

가. 제안서류 접수기준

기술제안공모평가 지침 「2-마」항에 따라 응모 등록한 응모자에 한하여 제안서류를 접수받는다.

나. 제출기간 및 장소

1) 제출기간 : 2013년 11월 25일 ~ 12월 06일 17:00까지 (평일만접수)

2) 제출장소 : 샘골농협 2층(가축분뇨 지역단위 통합관리센터 시범사업 추진사업단)

전북 정읍시 정우면 정신로 616번지(정읍시 정우면 초강리 550-5번지)

TEL : 063)537-9079, FAX : 063)537-9095

3) 제출방법 : 방문 제출(우편접수 불가)

다. 제출서류 목록

1) 기술제안공모 접수서(서식 #4)

2) 기술제안공모 신청서(서식 #5)

3) 제출도서(기술제안서 10부, CD 1매, 도판제출)

4. 제출도서

가. 제출도서의 종류

1) 기술제안서 각 10부

2) 기술제안서가 포함된 CD 1매.

※ “제출도서의 작성기준”을 준용하지 않을 시 감점 처리함.

나. 제출도서의 작성

1) 공통사항

○ 축척과 방위는 각 도면, 도판에 정확히 표현한다.

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 부득이 영문 또는 한문의 표기가 필요한 경우에는 한글 및 아라비아 숫자와 함께 가로 안에 표기한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

2) 기술제안 CD 1매

○ 기술제안내용 및 도면 수록

3) 기술제안서

○ 규격 : A4(가로21㎝×세로29.7㎝) 세로로 철한다(스프링 제본 불가).

○ 분량 : 제안 작성기준을 기본으로 하여 자유롭게 작성한다.

○ 재료

- 표지 : 백색아트지

- 내부 내용물 : 백색 모조지

○ 표 현

- 표지 : 별첨 양식(서식 #6, 기술제안서 표지)만 사용(작성요령 준수)

- 색채사용 가능

- 내부 내용물 작성방법

․글씨크기 : 자유 (단, 한글 글자크기 13포인트 이상)

․글씨체 : 자유 (단, 평가위원이 알아보기 편안한 글씨체)

○ 작성내용과 순서

- 표지

- 기술제안공모 신청서

- 목차

- 확약서

- 성능보증서

- 기술 제안서 (제공한 기술 제안서를 기준하여 작성할 것)

․업체능력 : 자원화시설 시공실적, 기술인력 및 기술(특허 등) 보유현황, 재무상태 등

․자원화시설 : 시스템 구성, 물질수지, 생산량예측, 계산서 등

․탈취시설 : 탈취시설 시공실적, 시설구성, 물질수지, 계산서 등

․경제성 : 제안 공사금액, 경제성 분석서(연간 250일 가동기준) 등

․도면 : 시스템 구성 평면도, 단면도, 흐름도 등(보충설명이 필요한 도면 제출)

⦁건축설계 구성 : 건축 구성 배치도, 평면도, 단면도, 입면도등

- 보충설명서 : 시스템 카달로그 및 사진 등

- 총공사 가격제안서(시스템과 건축(토목포함)은 분리하여 제안가격을 산정)

- 페이지는 중앙하단에 “-1-”과 같이 표시

5. 공사비 산출 기준

○ 공사비 산출 내역은 분야별 공사원가계산서 및 공종별 내역을 제출(#서식 6 별표2 참조)

○ 사업단의 기본요구사항 및 특수요구사항에 포함된 시설은 반드시 공사비에 반영

(미반영시 감점처리)

6. 기술제안공모 계획원칙

가. 계획의 원칙

1) 공동사항

○ 양질의 가축분뇨 자원화 생산 가능시설 (비료공정규격, 가축분뇨의 자원화 및 이용 촉진에 관한 규칙 등)

○ 무악취 및 무방류 등 주변 환경에 영향을 미치지 않는 친환경 시설 조건 충족

2) 단지 요구사항

○ 단지별 기본요구사항 및 특수요구사항에 맞는 시설

7. 평가 및 제안기술 선정

가. 평가

1) 평가방법 : 평가기관에서 사업단과 협의하여 평가방법을 수립하고 항목을 공개한다.

○평가위원회를 구성하여 공정하고 합리적으로 평가한다.

○ 평가항목 및 배점기준

평 가 항 목		배 점 기 준	평 가 자	비 고	평가대상
계		150점
평가	1차(서류평가)	70점	평가위원회	계량평가	제안서접수자전원
	2차(현장평가)	40점	평가위원회	계량평가	서류평가 상위3개 업체 선정자에 한함
	3차(발표평가)	40점	평가위원회	계량평가	서류평가 상위3개 업체 선정자에 한함
제안기술 선정		샘골농협(사업단)

○ 중점 평가방향

- 환경친화적인 시설 구성[밀폐형/악취 최소화]

- 가축분뇨자원화시설 구성 및 안정성

- 실현 가능성 및 시공능력

- 성능 및 품질

○ 공동응모의 경우 대표업체인 가축분뇨퇴비화 처리시스템업체에 대해서만 평가함.

단, 공동이행 응모 시 재무 및 경영 등 업체능력은 공동 평가함.

2) 1차 서류평가의 제한

○ 서류(가축분뇨자원화 시설로 1일 50톤 이상 가동실례가 1건 이상,

1년 이상 가동시설이 있는 시스템으로 시공능력을 확인 받아 제출 등)

미비 업체는 1차 발표심사에 참여할 수 없음.

○감점사항은 평가위원 주관 평가로 단지요구사항 반영여부,제출서식규정        준수여부, 상시 기술 인력의 의료보험 가입증명서첨부여부에 따라 최고

5점 이내에서 감점

○ 1차 발표심사 결과 상위 3개 업체만 2차 현장평가에 참가.

3) 2차 현지평가 제한

○ 평가대상지를 업체당 1개소로 제한함. 단, 국외지역은 평가대상지에서 제외함

○ 1차 평가 점수 상위 3개 업체만 2차 평가 대상임.

○ 응모자는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 다음의 경우는 실격처리 한다.

⦁ 응모자가 본 공모규정을 위반한 사항이 평가에 영향을 미칠 수 있다고 인정되어 평가위원 중 과반수이상이 실격처리에 동의한 때

⦁ 평가에 영향을 주기 위한 공작을 하거나 기타의 방법으로 불공정 행위를 한때

4) 3차 발표평가 제한

○ 1차평가 합산점수 상위 1~3위 업체만 3차평가 대상임.

○ 부지의 인허가 사항을 충족시키지 못할 경우 평가 대상에서 제외함

나. 시스템 선정 발표

1) 평가위원회에서 제안기술 평가결과를 샘골농협 (사업단)에 통보하고 샘골농협이

이를 발표한다.

2) 제안기술 선정은 순위에 의거 샘골농협(사업단)에서 우선협상대상자로 선정한다.

다. 제안기술 선정

1) 선정 제안기술은 협상에 의한 계약체결 기준(수의 시담)에 의해 주 공법업체

(시공업체)로 선정한다.

2) 주 공법업체(시공업체)에 실시 설계를 주관한다.

3) 평가결과 공모 목적에 적하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결된 경우

제안기술 선정을 않을 수 있다.

8. 기  타

가. 저작권

1) 본 공모를 통해 선정된 시스템은 샘골농협에 저작권이 귀속된다.

나. 제안서 반환

1) 제안 서류의 반환은 없다.

2) 제안 서류의 모든 권리는 발주처에 귀속되며, 발주처에서 임의로 처리

한다.

다. 유의사항

1) 제안자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 제안자는 현장 부지의 인허가 조건 등을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 제안자는 사업단의 요구사항을 검토 후 계획에 반영해야 한다.

4) 참여업체는 본 기술제안 준비, 작성, 발표 등에 소요된 일체의 경비(비용)에

대하여 보상을 요구할 수 없다.

5) 사업대상 부지에 대한 구적도는 사업단에서 별도로 제공.

별표 1 . 사업단 요구사항

※ 공모문안 전문 홈페이지 참조

※ 홈페이지

1. 샘골농협 홈페이지(http://www.samgolnh.com) : 공지사항 참조

2. 정읍시 홈페이지(http://www.jeongeup.go.kr) : 고시/공고 참조

3.  (사)한국축산환경시설기계협회(http://kalhem.or.kr) 공지사항 참조

별표 1.

샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터

자원화 시범사업 일반 요구사항

구 분	내 용
축분반입규모	○ 일처리 용량 축분75톤(함수율 75%), 돈분뇨 20톤 ○ 처리장내 현황 등을 감안하여 처리예비율(20%이상)을 감안
생산규모	○ 최소 60만포/연 이상(20kg/포 기준, 250일/연 가동기준)
부자재 종류	° 수분조절(함수율 25%) → 톱밥․팽연화왕겨의 선택적 사용이 가능 할 것.
예 정 부 지	° 사업장 부지면적 : 36,904㎡ ( 전북 정읍시 정우면 우일리 산18-1번지)
예상 사업비	° 사업비 : 70억원 - 토목, 건축, 기계설비(전기, 소방,위생), 조경, - 퇴비화 시스템설비, 부대시설 및 장비 포함
분뇨 수거방법	° 차량(암롤카) 및 기타장비로 수거 이송
퇴비 판매방법	° 퇴비 : 소포장(20kg/포) 및 벌크(1톤 톤백)
기 타 사 항	° 우분, 계분, 돈분을 주원료로 하여 시스템 공모할 것. ° 퇴.액비화 100%" 무방류 시스템을 공모할 것. ° 충분한 축분 저장조 및 원료 혼합조를 갖출것 ° 유기질비료 생산량 : 60만포이상/년 (가동 250일기준) 감안 ° 후숙시설은 단지 농업현황(벼,마늘,양파 2모작지대)을 감안하여 "비수기" 저장능력이 충분하도록 할 것. ° 시스템 사양은 작동(조작)이 단순해야 할 것.

샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터

자원화 시범사업 특수 요구사항

구 분	내 용
퇴비품질	° 친환경농산물 생산을 위한 비료공정규격의 퇴비 기준을 충족 할 것 ° 퇴비 생산을 위해 첨가물활용 가능(단, 비료공정규격 설정및 지정에 한함) ° 퇴비품질 향상 및 유지를 위해 수분측정기, 부숙측정기, 고형물측정기를 구비할 것
첨 가 물	° 품질 향상을 위해 첨가물은 활용하되, 품목은 최소화 할 것.
처리방식	° 무방류 퇴.액비화(100%) 시스템
발효기간	° 가축분 퇴비제조에 충분하도록 법적 발효기간 유지
시설장비	° 기계식 교반기(스크류, 로타리, 에스컬레이터) 적용 ° 시설장비는 유지보수 원할과 A/S 조치가 즉각 가능할 것
포장시설	° 자동화(ROBOT) 포장설비 할 것(로봇파렛타이즈,자동래핑 포함). (처리용량 : 일평균 퇴비 생산량, 성수기 최대 필요량 등 감안) ° 동절기에 동파등 무리가 없도록 설계
악취방지	° 악취방지시설 설치하여 민원발생이 없도록 할 것 ° 출입구는 자동 스크린도어 설치 ° 설비의 부식을 방지할 수 있는 재료 사용
시 스 템 범 위	° 축분저장조 및 원료혼합시설, 이송시설, 발효조(최소 3.0m이상 교반) ° 분쇄라인 및 자동화(ROBOT) 포장설비 ° 악취포집 및 저감시설 ° 자원화 시설에 사용되는 전기 분야(내,외선전기) ° 기타 → 출입소독조, 계근대, CCTV(공정별 확인가능),사용장비등. ° 생산퇴비의 수분조절을 위한 액비저장조 및 액비가수시설 ° 퇴비사 지붕 및 벽체 재질은 암모니아 내성에 강한 재질로 할 것
기타사항	❍ 전기설비, CCTV, 계근대 등은 사무실에서 관리가 가능하도록 할 것 ❍ 단위기계별 성능은 적정량이상이 될 것. ❍ 친환경 농업관련 상징적 제안 및 시스템 제출시 가점부여 ❍ 퇴비공정간 일체의 화학약품을 사용하지 않을 것 ❍ 경영수지 개선을 위한 시스템 제안 시 가점부여 ❍ 건축은 전기,소방,토목,위생설비,조경을 포함 ❍ 건축은 지붕,벽체,철골 재질 등의 부지 방지를 위한 설계공법 적용 시 가점부여

9. 각 종 서 식

가. 기술제안공모 응모신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #1
나. 대표자 선임계․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #2
다. 기술제안공모 서면 질의서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #3
라. 기술제안공모 접수서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #4
마. 기술제안공모 신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #5
바. 샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 시범사업 기술제안서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	서식 #6

(서식 #1)

기술제안공모 응모신청서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합 관리 센터 자원화 사업에서 시행하는 기술제안공모에 있어서 공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 1. 참가자격 증빙서류 2. 대표자 선임계 (양식2) 3. 1일 50톤이상 가축분뇨 자원화시설 시공 및 운전실적 증명서 1부(양식1) 4. 사업자 등록증 사본 1부 5. 국세·지방세 완납증명서 1부 6. 2012년도 재무제표 1부(공인회계사확인 세무보고용 재무제표) 7. 법인인감증명서 1부 8. 사용인감계 1부.(별도 사용인감 사용시) 9. 기타 : 공동응모자의 경우에는 상기 해당 서류를 각각 제출하여야 한다. 붙임 : 시공․운전 실적 증명서 1부. 2013년 11월 일 신청인(대표자) : (인) 샘골농업협동조합장 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안 공모신청 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전화번호
대 표 자		주민등록번호
접수자: (인)

시공․운전 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	심사용			-
	시공규모 (용량,방식)
시공 실적/ 운영 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( )
	시설개요 (간략히)				운영기간	‘00.00 ~ 현재
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함. 2013 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : 담당자 :

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

(서식 #2)

대 표 자 선 임 계

본인은□□업체(회사)의 대표(공동대표)로서  샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합 관리 센터 자원화 사업에서 시행하는 기술제안공모에 관한 모든 권한을 공동으로 응모하는 △△△업체의 대표 ○○○에게(본 회사 공동대표○○○에게) 위임합니다.

2013년    월     일

회사

대표              (인)

※ 두 업체 이상이 공동으로 응모하거나 한 업체에 대표가 2인 이상의

공동대표로 되어 있는 경우 1인의 대표자를 선임하여야 함.

(서식 #3)

기술제안공모 서면질의서
대 표 자	(인)	응 모 접수번호
업 체 명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

(서식 #4)

기술제안공모 접수서

※ 접 수 번 호		NO.
대 표 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소재지		전 화 번 호 (FAX번호)
공동응모 업 체 명	업 체 명 (대표자)		주민등록번호
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX번호)
샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합 관리 센터 자원화 사업에서 시행하는 기술제안 공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 : 1. 심사용 도판 1매. 2. 제안설명서 10부. 3. CD 1부. 2013년 월 일 신청인(대표자): (인)
샘골농업협동조합장 귀하

․․․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․․․ 절  취  선․․․․․․․․․․․․(인)․․․․․․․․․․

기술제안공모 접수증
※ 접수번호				접 수 인
업 체 명		전 화 번 호
대 표 자		주민등록번호
소 재 지		FAX 번호

(서식 #5)

기술제안공모 신청서

신청분야		퇴 비 화
사업 주체	구 분	□ 개인 □ 법인 □ 기타
	업체명칭		사업자등록번호
	주 소	□□□-□□□
대표자	성 명		주민등록번호
	주 소	□□□-□□□
	전화번호	․집 : ․사무실 :
담당자		․직책 : ․사무실tel : ․성명 : ․개인 HP :
시스템명칭
응모지		샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 시범사업
샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업에서 시행하는기술제안공모에 붙임과 같이 응모합니다.
		.
		2013. . .
		신청자(대표자) (인)

(서식 #6)

샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업

기술제안서(안)

2013.    .    .

업  체  명

목        차 (예시)

확 약 서 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
성능보증서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
제안서 내용(요약)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
Ⅰ.업체능력․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅱ.자원화 및 탈취시설 기술성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
1.자원화 시설․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	8
2. 탈취 시설․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	16
3 . 주요설비 사양․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	25
Ⅲ. 경제성․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	27
Ⅳ. 성능보증계획․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	31
Ⅴ. 기타필요도면 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	32
기타자료 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	33

※ 목차 작성 시 세부항목으로 구분하여 작성

확   약   서

본인은 『샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업 시스템 선정』기술제안공모에 참여하고자 참여조건을 승낙하고, 붙임과 같이 기술제안서를 제출합니다.

또한, 본 제안서를 제출함에 있어  그 내용의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가 상의 불이익 및 기술공모 대상 제외 등의 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 사업단의 기술공모 결과에 대해서도 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2013년      월      일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

샘골농협 귀하

- 1 -

성능 보증서

수  신 : 샘골농협

제  목 : 성능보증서 제출

샘골농협 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업 기술제안공모를 시행함에 있어 제안된 공법에 대한 성능보증 책임이 당사에 있음을 숙지하고 있으며, 당사는 본 적용공법의 기술 공급자로서 기술제안공모 시 제시된 바와 같이 제반 성능을 보장합니다.

그리고 성능 미달 시 본 사업에 투입된 비용 일체에 대해 변상조치 할 것을 확약합니다.

2013 년     월     일

주    소 :

업 체 명 :

대표자명 :                          (인)

- 2 -

제안서 내용 (요약)

구 분			설명	비 고
Ⅰ.업체능력	상호		(주)OOOO
	사업장 위치		OO도 OO시 OO동 OO번지
	기술인력		명	특급기술자 등
	기술사항(특허 등)		건	특허번호000-000 등
	자원화시설 실적		OO.OO억원	OO 건
	탈취시설 실적		OO.OO억원	OO 건
	자본금		OO.OO억원
	부채		OO.OO억원
	관련면허		OOOO 등록증	O 건
Ⅱ.기술성	시스템 명칭		OOOOO	자원화설비, 탈취설비 각각 작성
	시스템 공정도(모식도)		-
	시스템의 개요 및 장․단점		-
	단위공정의 원리 및 기능		-
	성능관련자료		-
	물질수지 및 계산서		-
	용량계산		-	시설물설계기준, 유입량 및 성상, 물질수지, 시설물 용량계산 및 수리계산
	최종생산물 생산량(ton/day)		퇴비, 액비, 구분하여 작성
	탈취설비시설의 목표		-	암모니아, 황화수소, VOC 등
Ⅲ.경제성	공사비	기계/배관	OO.OO억원	원가계산서 및 공종별 내역서 별첨
		전기/계장	OO.OO억원
		건축	OO.OO억원
	운영관리비(연간운영비)		OO.OO백만원	운영비세부내역 별첨
	보조연료사용량(ℓ/년)		OO.OO억원	경유기준
	예비품 및 소모품 내역		-	발주처에 공급하는 예비품 내역
	연간 정비기간		-	부품확보방안, 납품기간, 정비주기 및 일수 기재

※ 서식에 포함된 각 항목을 빠짐없이 작성

Ⅰ. 업체능력

구 분	내 용	비 고
상호	사업자등록증, 등기부등본, 납세증명서(국세, 지방세)
대표자
사업장 위치
기술인력	기술자 등급별 별첨 자료 첨부 (특급기술사 1명, 고급기술자 2명, 중급기술자 3명.끝)
기술사항	특허 및 실용신안 자료첨부 (특허 5건, 실용신안 2건. 끝)
주요생산품
자원화시설실 적	단일공사로 퇴비화, 액비 구분 실적확인서 자료첨부 (총 2건, 15.2억)
탈취시설 실 적	실적확인서 자료첨부 (총 2건, 15.2억)
자본금	표준재무제표 증명 자료첨부
부 채	표준재무제표 증명 자료첨부
관련면허	면허관련 자료 첨부 가축분뇨자원화시설 설계 및 시공등록증 등

※ 서식 2 대표자 선임계에서 선임한 업체에 대해서만 평가함.

1. 기술인력

구분	성명	분야	자격 및 학력	경력
1	OOO	기계	일반기계기사	5년
2	OOO	환경	박사	2년
3
4

※ 입증자료 : 자격증 사본, 졸업증명서 사본, 경력증명서 사본 중  택 1부.

2. 특허 및 실용신안 등록현황

NO.	명칭	발급번호	취득일	유효기간	발급기관
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 서류 사본 각 1부.

3. 실적현황

◦ 방법 1 : 자원화 시설, 탈취시설 각 실적 선택

자원화시설	용량 (ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

탈취시설	용량 (m3/min)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

◦ 방법 2 : 자원화 및 탈취 통합 실적 선택

자원화 + 탈취 시설	용량(ton/d)	발주처	공사금액	준공일	비고
총 계	0		0
					운영 중

※ 입증자료 : 시공실적증명서 시설별  1부(별첨 1 사용실적증명서 첨부).

4. 부채 및 자본

NO.	명칭	금액	발급기관
1	자본
2	부채
3	자본/부채

※ 입증자료 : 업체별 표준재무제표 각 1부.

5. 관련면허(면허 첨부)

구분	면허명	면허일
1
2
3
4

※ 입증자료 : 관련 면허사본 각 1부.

Ⅱ. 자원화 및 탈취시설 기술성

1. 자원화시설

명 칭	주 요 내 용
가. 처리공법	① 시스템의 명칭 ② 시스템 계통도 ③ 시스템의 개요, 장․단점 설명 ④ 단위공정의 원리, 기능 및 특징 설명 ⑤ 성능관련자료(비료품질 성적서 등) * 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부
나. 용량계산	① 용량계산 ㉮ 유입량 및 성상 ㉯ 주요 공정 설계기준 ㉰ 물질수지도 ㉱ 시설물 용량계산 및 수리계산 ② 최종생산물 및 생산량 * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부

※ 위 내용을 기본으로 충실하게 작성

가. 처리공법

①  시스템 명칭 : OOOOO 시스템

② 시스템 계통도(예시)

③ 시스템 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점	1. 2. 3. 4. 5.
단 점	1. 2. 3. 4. 5.

④ 단위공정 원리, 기능 및 특징

※ 자원화시설 공정별로 구분하여 작성

공 정	A 시설
원 리
기능․특징

공 정	B 시설
원 리
기능․특징

공 정	Z 시설
원 리
기능․특징

⑤ 성능관련자료

비 료 품 질 성 적 서 등

나. 용량계산

① 공정별 용량계산

공 정	A 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)

공 정	B 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉰시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)

㉱ 물질수지도 (자율작성)

② 최종생산물 및 생산량

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
친환경퇴비
가축분퇴비
퇴 비
액 비

2. 탈취 시설

명 칭	주 요 내 용
가. 처리공법 (기술성)	① 탈취설비 명칭 ② 공정도 (모식도) ③ 탈취설비 개요 장․단점 ④ 단위공정의 원리, 기능 및 특징 설명 ⑤ 처리성능관련자료(탈취설비 성적서 등) ⑥ 탈취폐액 처리 방안 계획 * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부
나. 용량계산 (기술성)	① 용량계산 ㉮ 주요 시설물 설계기준 ㉯ 유입량 및 성상 ㉰ 물질수지도 ㉱ 시설물 용량계산 및 수리계산 ② 악취방지시설 목표 농도(암모니아, 황화수소, 메캅탄, VOC 등) * 자율양식 : 기타 제안업체에서 작성하고 싶은 사항 첨부

※ 위 내용을 기본으로 충실하게 작성할 것

가. 처리공법

① 탈취설비 명칭 : OOOOO 시스템

② 탈취설비 공정도(자율양식)

③ 탈취설비 개요 및 장․단점

구 분	내 용
시스템 개요
장 점	1. 2. 3. 4. 5.
단 점	1. 2. 3. 4. 5.

④ 탈취설비 원리, 기능 및 특징

※ 자원화시설 공정별로 구분하여 작성

공 정	A 시설
원 리
기능․특징

공 정	B 시설
원 리
기능․특징

공 정	Z 시설
원 리
기능․특징

⑤ 성능관련자료

탈 취 설 비 성 적 서 등

⑥ 탈취 폐액 처리방안 계획

구 분	주 요 내 용	비고
폐액발생량
예상 폐액성상
폐액 처리방안

나. 용량계산

- 21 -

① 공정별 용량계산

공 정	A 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉱시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)

공 정	B 시설
㉮유입량 및 성상
㉯설계기준 및 목표
㉱시설물 용량계산 및 수리계산
용수사용량(m3/일)

다. 물질수지도 (자율작성)

② 악취방지시설 목표 농도

구 분	생 산 량 (1일 기준)	비고
OOOO
OOOO
OOO
․ ․ ․
기 타

3. 주요설비 사양

① OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

② OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

③ OOO 설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

④ OOO설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

⑤ OOO설비 및 부대시설

NO.	명칭	용량	수량	주요 재질	비고
1
2
3
4

※ 추가 설비가 있을 시 별도로 표기

Ⅲ. 경제성

1. 공사비 (별첨 2 공사비 산출서 첨부)

구 분	공 사 비	비 고
자원화시설공사
탈취시설공사
전기(2차측)시설공사
부대설비공사
소 계 1
제반경비		소계 1 × 0.15
소 계 2		소계 1+ 제반경비
부가가치세		소계 2 × 0.1
합 계		소계 1+소계 2+부가가치세

※ 가. 자원화시설, 탈취시설, 토목시설공사, 전기시설, 부대설비공사 구분하여 제시

나. 공사비는 공사 제반경비(원가계산 경비) 포함 기준

. 공사비 산출은 부가세 포함 기준

2. 운영관리비 (별첨 3 운영관리비 산출근거 첨부)

구 분	산출항목	산출내역
투 자 비	시설투자비	‧ 산출내역 별첨4
운전조건	연간 운전시간	‧ 8,760 시간 (365일)
	연간 정기보수기간	‧ 576 시간 (24일, 2일/월 기준) ‧ 정기보수기간에도 주요설비는 운전
	1일 운전시간	‧ 24 시간
탈취시설 폐액 처리량	탈취시설 폐액 처리량	‧ ㎥/년( ㎥/일 기준)
고 정 비	인건비	‧ 업체제시
	관리비	‧ 업체제시
	유지보수비	‧ 업체제시
변 동 비	전 력 비(산업용 전력 을, 선택요금(Ⅱ),고압전력(A) 기준)	‧ 기본요금 : 원/kW.년
		‧ 사용요금 : 원/kWh (연간)
	연료비 (년간 보조연료사용량 표기)	‧ 사용연료명 : 원/L
	용 수 비	‧ 상수 : 원/㎥.년
	측정 검사비	‧ 품질 분석비(4회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%

※ 유지관리비 산출기준은 제안서 제출 월(月)에 발간된 물가자료를 기준

가. 고정비 산출(연간기준)

구 분	산출항목	산출근거	금액(백만원)
고 정 비	인건비
	관리비
	유지보수비
소계

나. 변동비 산출(연간기준)

구 분	산출항목	산출근거	금액(백만원)
변 동 비	전력비	‧ 기본요금 :
		‧ 사용요금 :
	연료비 (연간 보조연료 사용량 표기)	‧ 정상가동 시 :
	용 수 비	‧
	측정검사비	‧ 처리수질 분석비(4회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%
소계

다. 운영관리비

구 분	금 액
고정비
변동비
운영관리비(원/년)
톤당 운영비(원/톤) ※ 톤 기준 : 주원료량

3. 예비품 및 소모품 내역

구 분	내 역
	※시공사가 공급하는 예비품 내역

4. 연간 정비기간

구 분	내 용
	※부품 확보 방안, 납품기간, 정비주기 및 일수기재

5. 수익성 비교

구 분	금액	산출근거	비고
수 익(A)
제품판매액			일반 : 3,500원/포(20kg) 그린 : 5,000원/포(20kg)
지 출(B)			최초 7년간
지 출(C)
초기투자비			건축, 시스템, 장비 포함
감가상각비			시설물 및 건물 7년 기준으로 작성
운영관리비
수익(A-B)

Ⅵ. 성능보증계획

(별첨 4  성능보증계획 및 기술이전계획서 첨부)

Ⅴ. 기타 필요도면

1. 처리공정도(흐름도)

2. 배치도(시설계획 평면도, 기계배치 평면도)

3. 물질수지도(Mass Balance)

별첨 1

시 공 실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도	공법선정심사용			-
	시공규모 (용량, 방식)
시공 실적 내용	시 설 명				구 분	시공( ) 기타( )
	시설개요 (간략히)
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고
					비 율	실 적
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함. 2012년 월 일
	기 관 명 : (인) (전 화 : )
	주 소 : (FAX : )
	발급부서 : (담당자 : )

※ 실적제출서류

- 국가ㆍ지방자치단체 또는 공공기관에서 발급한 시공실적증명서

- 기타 시공실적 증명서

- 시공실적증명서에 공사규모(퇴비화, 액비화, 처리방식, 처리용량)가 기재되지 않은 경우는 시설용량, 처리방식을 증명할 수 있는 증빙자료 제출

- 공동도급 및 하도급 공사의 경우 실적을 확인할 수 있는 관련 증빙서류

- 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 계약이행보험증권 사본 등 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부하여야 함

- 실적증명심사 시 설명 및 확인 등의 입증책임은 시공실적을 제출한 업체에 있음.

별첨 2

공 사 비 산 출 서

구 분	공 사 비	비 고
자원화시설공사
탈취시설공사
전기시설(2차측)공사
부대설비공사
소 계 1
제반경비		소계1 × 0.15
소 계 2
부가가치세		소계 × 0.1
합 계		소계1+소계2+부가가치세

※ 첨부서류(작성예시 참조) : 예시 1. 공정별 집계 내역서

예시 2. 기계 설치내역

별첨 3

운영관리비 산출근거

구 분	산 출 항 목	산 출 내 역
투 자 비	시설투자비	000원
고 정 비	인건비	000 원/일 * 365일/년
	관리비	인건비의 10.0%
	유지보수비	시설투자비의 0.5%
	원료구입비
소계
변 동 비	전력비	‧ 계약전력 : 00kw
		‧ 사용전력 : 00kw.h
	연료비	‧ 정상가동시 : 00L/H
	용수비	‧ 00㎥/일
	측정검사비	‧ 처리수질 분석비( 회/년)
	기타	‧ 시설투자비의 0.02%
소계

※ 투자비는 건축 사업비, 장비구입비, 제안한 시스템 공사비 합계임.

별첨 4

성능보증계획 및 기술이전계획서

구 분	단 위	성능보증품질
성능보증내용
주원료투입량	㎥/일	-
부원료투입량	-	-
최소 최종생산량	톤/일
수분함량	%
고형물함량	%
유기물함량	%
질소함량	%
비료유해 물질함량	㎎/L
악취발생 정도
기타
기술이전내용
기술이전사항을 간략히 작성

별첨 5

가축분뇨 지역단위통합관리센터 공사 참여조건 승낙 확인서

본 회사는 다음 “가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 시범사업 공사 참여 조건”을 성실히 이행할 것을 승낙하고, 공법사 선정계획에 참가할 것임을 확인합니다.

회사명 :                   대표자 :            (서명)

2013년   월     일

< 공사 참여조건 >

1. 공사명 :

2. 예산액 : 7,000백만원

3. 시설별 사용자재 또는 규격

① 배관(액체 또는 기체 이송관) : 가축분뇨 처리에 사용하는 일체의 배관은 스테인레스 304(강관인 경우 : 수도배관용 KS 규격 이상)으로 시공해야 한다.

② 저장조(가축분뇨 저장 또는 액비화 시설) : 가축분뇨 등을 저장하는 저장조 또는 액비화시설의 구조물은 콘크리트 또는 스테인리스 304로 시공해야 한다.

- 콘크리트 저장조는 콘크리트 KS규격 자갈크기(25)-강도(240)-슬럼프(12) 이상으로 해야 하고, 내외벽은 방수처리를 해야 한다.

- 콘크리트 액비화 저장조의 외벽 최소 두께는 250㎜ 이상으로 해야 한다.

※ 위 제1항 및 제2항 외의 부품 등에 스테인리스 및 콘크리트 구조물 이외의 자재를 사용할 경우에는 사용기간을 명시하고 교체비용 등을 운영비에 반영하여야 한다.

③ 액비화시설 : 다음의 조건을 갖추어야 한다.

ⅰ) 액비생산 시설은 1개월 이상을 처리할 수 있는 시설 용량을 확보해야 하고, 액비 저장시설은 3개월 이상의 보관 용량을 확보해야 한다. 다만, 연중 농경지 등에 액비를 공급하거나 양질의 액비를 판매하는 경우 저장시설 용량을 달리 할 수 있다.

ⅱ) 액비화 시설에 필요한 공기공급과 관련된 사항은 “가축분뇨자원화시설 표준설계도 해설서”(2009.11.17)에 준하여 설치해야 한다.

- ㎥당 액비화조 공기 필요량 : 0.03㎥/air/min

- 산기관(공기분사 장치) : 고효율 산기관 적용

- 산기관 공기량 조절밸브 핸들 : 스테인레스

- 브로워 : 수압 5m 이상 능력

④ 퇴비화시설 : 1일 처리대상 물량(예 : 슬러지 10톤)을 기준으로 45일 이상 부숙시킬 수 있는 용량(교반 및 통풍 퇴적 부숙기간을 포함)을 확보하여야 하고, 생산된 퇴비를 30일 이상 저장할 수 있는 공간을 확보해야 한다.

- 퇴비화시설 바닥에 공기공급 및 침출수 배출을 위한 배출틀(가축분뇨 자원화시설 표준설계도 준용)을 설치하여야 한다. 다만, 침출수가 없는 공법의 경우 배출틀을 설치하지 아니할 수 있다.

- 퇴비화 교반발효기는 함수율 75%기준일 때 교반 높이(분뇨+톱밥등 퇴적 높이)를 100%를 교반할 수 있는 동력과 교반기를 사용하여야 한다.

⑤ 탈취시설 : 각 공정(집수시설, 고액분리시설, 유량조절시설, 퇴비화시설)에서 발생하는 악취가 외부로 유출되지 않도록 하여야 하며, 다음 조건을 갖추어야 한다.

- 덕트 재질 : 스테인레스 또는 FRP

- 탈취시설 본체 : 스테인레스 또는 FRP, 콘크리트

- 설비(pump) : 내부식성 재질(KS 인증 규격품)

- 약액저장 : 강산 또는 강알카리성 화학물질로 악취를 처리하는 경우 “독극물 안전수칙”에 의해 시설을 설치하여야 한다.

- 인입 송풍기 : 대상시설 발생 악취량의 120%이상을 확보하여야 하며, 회전 속도는 주파수변환 인버터에 의해 조절이 가능해야 한다.

⑥ 방음·방진설비 : 브로워, 송풍기 등은 별실로 구성하고 방음·방진 장치를 설치하여야 한다.

⑦ 고액분리기 :  가축분뇨 자원화(퇴·액비)를 위한 고액분리기는 가급적응집제 등 화학물질을 사용하지 않아야 한다.

- 1차 고액분리기는 1일 8시간 가동기준으로 처리용량을 확보하여야 한다.

- 2차 고액분리기는 미세분(뻘)을 가급적 약품을 사용하지 않고 제거할수 있어야 하며, 자동운전방식이어야 한다.

- 고액분리기(실)은 별도의 탈취 덕트(Duct)를 설치하여 악취가 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

⑧ 퇴비화 건축물 : 천정재 또는 기둥재는 방청처리(도료 포함) 또는 내부식성 재료를 사용하여야 하고, 낮 기준으로 전등을 사용하지 않을 정도의 조도를 확보하기 위해 지붕과 벽면에 투광창을 설치하여야 한다. 단, 퇴비 교반이 밀폐 원통형인 경우 달리할 수 있다

퇴비 원료 및 퇴비 등이 쌓이는 부분은 충분한 높이로 콘크리트 벽체를 설치하여야 한다.

⑨ 소독시설 : 출입구에 차량·대인·물품 등을 소독하기 위한 무인자동화 또는 수동식 소독시설(터널형)을 반드시 설치하여야 하고, 대인 및 물품 소독기도 설치하여야 한다.

⑩ 계근시설 : 가축분뇨 및 액비를 계량할 수 있는 전산화된 차량 계근대 시설을 설치하여야 한다.

⑪ 조경 : 농축산순환자원화센터 주변에 수목 식재, 화단 등을 조성하여 주민친화시설로 조성하여야 한다.

⑫ 관리동 : 사무실, 회의실, 실험실, 샤워실, 휴게실, 교육장 등을 확보하여야 한다.

⑬ 안전시설 : 다음 사항을 갖추어야 한다.

- 소방법에 의한 소방시설을 설치하여야 한다.

- 집수조에서 폭기조로 유입되는 배관 라인과 액비 반출조 등에 수량계측기 및 경보 장치를 설치(외부 누출 방지경보 포함)하여야 한다.

- 모든 액비 생산 저장조는 덮게 및 거품 제거시설 또는 가드레일(구조용 KS 스테인레스) 설치하여야 한다.

⑭ 기타 필요시설은 공법사가 정하여 설치할 수 있다.

4. 공법사 책임·부담, 시설준공 등

① 가축분퇴비와 가축분뇨발효액은 비료 공정규격 설정 및 지정(농촌진흥청고시 제2010-8호, 2010. 3. 29.)에 적합하여야 하며, 해당지역의 농업기술센터에 성분분석을 실시하고 부숙도 판정결과 적합여부 판단한 후 준공 신청을 하여야 한다. 퇴비화시설의 경우 비료관리법에 의한 제조업 등록을 하고 2급퇴비 이상을 생산하여야 한다.

액비는 대장균수 3,000개/㎖이하 이어야 한다. 살모넬라 등 병원성 미생물이 검출되지 않아야 하고, 부숙도 판정기준에 적합하여야 한다.

② 가축분 퇴비 및 가축분뇨발효액(액비)은 악취가 없어야 한다.

③ 공법 및 시공사는 시험운영 시작 직전까지 기성고에 따라공사비의 5분의 4를 지급받고, 2∼6개월간 시험가동 후 1개월 이상 정상처리(1일 처리능력의 90% 이상 처리)되는 사실이 확인되었을 경우(액비의 경우 부숙도 판정기준 적합, 퇴비의 경우 2급 퇴비 이상 생산) 준공신청을 하며, 준공검사 합격을 받은 이후 공사비의 잔액을 지급받는다.

④ 사업주체는 사업계획서에 의한 1일 처리계획 물량이 안정적으로 공급될 수 있도록 하여야 한다. 1일 처리계획 대비 반입물량 부족으로 인한 가동율이 낮은데 대한 책임은 사업주체에게 있고, 준공일 이후 공법사와 공동운영을 하지 아니하여 운전 미숙 등에 의해 발생하는  문제는 사업주체가 져야 한다.

⑤ 사업주체가 1일 처리계획물량은 100% 공급하였는데도 불구하고 준공일로 부터 하자보수이행기간동안 적정하게 처리되지 못할 경우 그 책임은 공법사에게 있다. 이 경우 사업주체는 다른 방법으로 처리할 수 있고, 이에 소요되는 비용은 공법사가 부담하여야 한다.

⑥ 사업비를 70억원 초과하는 금액을 제시하는 경우 해당금액은 공법사가 부담한다. 공법사로 확정된 자는  사업주체와 가격 등을 협의하여 준공일로 부터 농축산순환자원화센터를 3개월간  위탁 운영하여야 한다.(공법사는 여기에 소요되는 비용을 공사비에 포함시킨다)

⑦ 농축산순환자원화센터는 무악취 시설로서 지역 주민들에게 혐오감을 주지 않는 주민 친화시설로 설치하여야 하며, 악취방지법령에서 정하는 방법에 따라 배출허용기준을 충족하는 시설을 설치하여야 한다.

⑧ “농축산순환자원화센터 공사 참여조건”에 규정되지 아니한 부분은 “ 농축산순환자원화센터 설치공사 도급표준계약서(별첨1)”와 “ 농축산순환자원화센터 설치공사 도급 표준계약조건(별첨 2)”을 따라야 한다.

5. 기타 제재사항

① 위의 농축산순환자원화센터 공법사로 참여하여 선정된 업체는 위 조건을 이행하여야 하며, 사업주관기관은 선정된 공법사가 참여조건을 불이행할 경우 공법사 취소 등의 조치를 취한다.

② 기타 제출된 서류 등에서 허위자료 등이 발견된 경우에는 즉시 참여를 제외하여야 한다.

〔별첨 1〕

가축분뇨 지역단위 통합관리센터 자원화 설치공사 도급 표준계약서
계약자	발 주 자(갑)		*법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자
	공사수급자(을)		*상호 또는 법인 명칭 *법인등록번호 *주소 *전화번호 *대표자 *면허번호
계약내용	사 업 명
	단위사업내용
	계 약 금 액		금 원정(￦ )총공사금액
	계약보증금		금 원정(￦ )총공사금액의 10%
	선 급 금		금 원정(￦ )총공사금액의 %
	지체상금율		1일 계약금의 1/1,000
	착공년월일
	준공년월일
	하자보수 이행기간		2년
	기 타 사 항
하자담보책임(복합공종의 경우 공종별 구분기재)
공종		공종별 계약금액	하자보수 보증금율(%) 및 금액	하자담보 및 A/S 책임기간
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
			( )% 금 원정
갑과 을은 상호 대등한 자유의사 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위의 공사에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약당사자는 기명날인 한 후 각 1통씩 보관한다. 년 월 일 붙임서류 : 1. 가축분뇨 지역단위통합관리센터 공사도급표준계약조건 1부. 2. 농협 공사계약일반조건 1부. 3. 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 현장설명서 등) 1부. 4. 공사비 산출내역서(을 작성제출) 1부. 5. 공사입찰유의서(지명경쟁입찰이 있는 경우에 한함) 1부. 6. 가축분뇨 지역단위 통합관리센터 공사계약특수조건 (특약이 있는 경우에 한함) 1부. 갑(법인 대표) 인 을(공사수급인) 인

〔별첨 2〕

가축분뇨 지역단위통합관리센터 자원화 공사도급 표준계약조건

- 환경부 지역단위통합관리센터 자원화사업 지침 관련 준용 -

제 1조 (총칙) 발주자 (이하 “갑”이라 한다)와 수급인 (이하 “을”이라 한다)은 대등한 자유의사 입장에서 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제 2조 (법령의 준수) “갑”과 “을”은 이 공사의 계약을 이행함에 있어서 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 건설산업기본법, 공정거래에관한 법률 등 관련법령의 제 규정을 준수하여야 한다.

제 3조 (발주자) “갑”은 “을”에게 이 공사 수행에 필요한 협조와 지원을 하여야 한다.

제 4조 (수급인) ① “을”은 이 계약조건과 설계도서 (도면, 시방서, 공사내역서, 현장 설명서 등을 포함한다. 이하 같다)에 의하여 공사를 시공한다.

② “을”은 공사비산출내역서를 작성하여 계약 체결 전에 “갑”에게 제출하여야 한다

③ “을”은 설계도서에 명시되지 아니한 것이라도 공사의 경미한 (경미하다함은 해당공사단가를 변화시키지 않는 것을 의미한다) 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사에 대해서는 “갑”과 감리자 (감리계약에 의한 감리자가 없는 경우에는 시.도, 시.군의 관련공무원을 말한다. 이하 같다)의 허락이 있는 경우에 계약금액의 범위 내에서 시공한다.

제 5조 (계약문서) 계약문서는 표준계약서, 설계도서, 농축산순환자원화센터 공사 도급표준계약조건, 공사 계약특수조건(특약이 있는 경우에 한한다), 공사비산출내역서, 농축산순환자원화센터 공사입찰유의서(경쟁입찰의 경우에 한한다)로 구성되며, 상호보완의 효력을 지닌다.

제 6조 (착공신고) “을”은 착공 시에 착공신고서와 공사예정공정표를 “갑”에게 제출하여 승인을 얻어야 한다

제 7조 (의견의 청취) “을”은 시공상 공정의 세부작업 등을 정함에 있어 미리 “갑”과 감리자의 의견을 청취하여야 한다.

제 8조 (계약보증금) ① “을”은 계약 체결 전까지 계약금액(부가가치세를 포함한다. 이하 같다)의 100분의10 이상의 계약보증금을 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이  발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다) 또는 각호의 보증서 등으로 “갑”에게 납부하여야  한다

1. 예산회계법 시행령 제135조의 규정에 의한 금융기관 (이하 “금융기관”이라  한다) 및 은행법에 의해 금융기관이 발행한 지급증서

2. 전문건설공제조합법에 의한 전문건설공제조합이 발행한 채무액등의 지급을 보증하는 보증서

3. 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권

② 설계변경, 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 증액된 경우에는 “을”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “갑”에게 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 “갑”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “을”에게 반환하여야 한다.

제 9조 (계약보증금의 처리) ① “을”이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금은 “갑”에게 귀속된다.

② “갑”은 계약이 이행된 후 제8조의 규정에 의하여 “을”이 납부한 계약보증금을 “을”에게 지체 없이 반환하여야 한다.

제10조 (권리 또는 의무의 양도) “을”은 이 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의무를 제3자에게 양도하거나 승계하게  할 수 없다. 다만, 서면에 의해 “갑”의 승낙을 받은 때에는 그러하지 아니한다.

제11조 (연대보증인) 생략

제12조 (현장책임자) ① “을”은 건설산업기본법에 의한 계약된 공사에 해당하는 국가기술자격수첩 소지자를 당해 공사의 현장책임자로 두어야 하며, 이를 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 현장책임자는 공사현장에 상주하며 “을”을 대리하여 일체의 사항을 처리한다

제13조 (종업원 및 고용원) ① “을”이 공사를 시공함에 있어서 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 당해 공사의 시공 또는 관리에 관한 상당한 기술과 경험이 있는 자를 채용하여야 한다.

② “을”은 그의 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

③ “갑”이 “을”의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사의 시공 또는 감리에 있어 현저히 부당하다고 인정하여 “을”에게 이의 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

④ “을”은 제3항의 규정에 의하여 교체된 종업원 또는 고용원을 “갑”의 동의 없이 당해 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제14조 (공사재료의 검사) ① 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며 품질, 품명 등은 반드시 설계도서와 일치되어야 한다. 다만, 설계도서에 품질, 품명 등이 명확히 규정되지 아니한 것은 KS품  또는 KS품에 상당한 재료로써 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 재료는 사용 전에 감리자의 검사를 받아야 하며, 불합격된 재료는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다. 이 경우 “을”은 이를 이유로 계약기간의 연장을 요청할 수 없다.

③ 제2항의 규정에 의한 감리자의 검사 결과 불합격품으로 판정된 재료는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “을”은 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있다.

④ “갑”은 “을”로부터 공사에 사용할 재료의 검사를 요청 받거나 제3항의 단서의 규정에 의한 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이  검사를 지체할 수 없다.

⑤ “을”이 불합격된 재료를 제거하거나 대체시킬 수 있으며, 그 비용은  “을”의 부담으로 한다.

⑥ 공사에 사용하는 재료 중 조합 또는 시험을 요구하는 것은 감리자의 참여 하에 그 조합 또는 시험을 한다.

⑦ 수중 또는 지하에 설치하는 공작물과 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 “갑” 또는 감리자의 참여 없이 시공할 수 없다

제15조 (대여품) ① 계약에 의하여 “갑”이 대여하는 재료와 기계, 기구 등의 인도시기는 공사예정 공정표에 의하고 그 인도장소는 시방서에 따라 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대여품의 소유권은 “갑”에게 속하며 “갑” 또는  감리자의 승낙 없이 공사장에 반입된 대여품을 반출할 수 없다.

③ “갑”은 “을”의 청구에 의하여 대여할 기계, 기구 등을 지정된 일시와 장소에서 인도하며 인도 후의 대여품의 사용상 발생하는 제비용은 “을”의 부담으로 한다.

④ 대여품을 지급한 후에 “을”은 대여품의 관리는 물론 멸실 또는 훼손이 있을 때에는 이에 대하여 책임을 진다. 다만, “을”이 선량한 관리자로서 주의 의무를 다한 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ “을”은 “갑”이 대여한 재료와 기계, 기구 등을 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용하여야 한다.

제16조 (부적합한 공사) ① “갑”은 “을”이 시공한 공사 중 설계도서에 적합하지 아니한 부분이  있을 때에는     이의 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

② 제1항의 경우에 그 부적합한 시공이 “갑”의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 “을”의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제17조 (공사의 변경. 중지) ① “갑”은 본 사업의 목적상 필요한 경우 감리자와 협의를 거쳐 “을”에게  서면으로 공사내용의 변경 또는 공사의 전부나 일부에 대한 시공의 일시 중지를 요구할 수 있다.

② “을”은 제23조의 규정에 의한 대금을 지급받지 못하는 경우에는 당해  공사의 시공을 중지할 수 있다.

③ “을”은 설계도서의 내용이 불분명 하거나 누락. 오기 또는 상호 모순점이 있는 경우에는 “갑”에게 설계변경을 요청할 수 있다.

④ 제1항 또는 제2항의 사유로 공사기간의 연장이나 계약금액의 증감  등이 필요하다고 인정될 때에는 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

⑤ 제4항의 규정에 의한 계약금액의 증감분의 산출은 다음 각호의 기준에  의한다.

1. 증감된 공사단가는 제4조 제2항의 규정에 의한 공사비산출내역서상의 단가  (이하 “계약단가”라 한다)로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시 기준으로 산정된 단가로하며, 경쟁입찰에 의하여 시공계약을 체결한 경우에는 등단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

3. 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 당시의 율에 의한다.

⑥ 계약내용 이외에 “갑”의 요청에 의한 추가공사에 대하여는 추가공사 내역서를 첨부하여 계약변경 합의를 하여야 하며, “갑”은 “을”에게 추가공사비를 지급하여야 한다.

⑦ “을”은 이 표준계약조건에서 정한 계약금액의 조정사유 이외에 계약 체결 후 계약조건의 미숙지, 덤핑수주 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제18조 (응급조치) ① “을”은 재해방지 등을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 미리 응급조치를 취하여야 한다.

② “갑” 또는 감리자는 재해방지, 기타 공사의 시공상 부득이하다고  인정할 때에는 “을”에게 응급조치를 요구할 수 있다. 이 경우에 “을”은 즉시 이에 응하여야 한다.

제19조 (불가항력에 의한 손실)  ① 천재지변 기타 불가항력에 의하여 검사를 마친 기성부분에 손해가 발생한 때에는 “을”은 지체 없이 “갑”에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 “갑”은 즉시 그 사실을 조사 확인하고 그로 인한 손해에 대하여는 다른 약정이 없는 한 “갑”과 “을”이 협의하여 이를 결정한다.

제20조 (검사 및 인도)  ① 시장.군수 및 감리자는 기성부분 검사 또는 준공검사가 있는 날로부터 10일 이내에 검사결과를 “갑”과 “을”에게 서면으로 통지하여야 한다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 때에는 즉시 “을”로부터 당해 공사목적물을 인수하여야 한다. 기성부분에 대하여는 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다.

③ “을”은 제1항의 규정에 의한 검사에 합격하지 못한 때에는 지체 없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 검사를 받아야 한다.

④ “을”은 시장.군수 및 감리자의 검사에 이의가 있을 때에는 “갑”에게 재검사를 요청할 수 있으며, 재검사의 요청이 있을 때에는 시장.군수 및 감리자는 지체 없이 재검사를 하여야 한다.

⑤ “을”은 공사를 완성하였을 때에는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐물 및 가설물을 공사장으로부터 즉시 철거 또는 반출하고 공사장을 정돈하여야 한다.

제21조 (손해의 부담) ① “을”은 목적물이 “갑”에게 인도되기 전에 공사의 목적물이나 제3자에게 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.

② “을”은 2년간 의무적으로 유지보수 및 운전을 하며 계약물량의 미처리에 따른 “갑”(참여농가 포함)의 손해에 대한 책임을 지진다.

③ “을”은 2년 유지보수 기간동안 악취처리에 대한 무한 책임을 지며, 문제 발생시 즉각 조치하고, 조치후에도 개선이 되지 않을 경우에는 타업체로 하여금 해당 시설을 보완할 수 있으며, 이에 대한 비용은 “을”이 책임진다.

제22조 (부분사용) ① “갑”은 공사목적물의 인도 전이라 하더라도 “을”과 시장·군수의 동의를 얻어 공사 목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

② “갑”은 제1항의 규정에 의한 사용으로 “을”에게 손해를 입히거나 “을” 의 비용을 증가하게 한 때에는 그 손해를 배상하거나 증가된 비용을 부담하여야 한다. 이 경우 배상액 또는 부담액은 “갑”과 “을”이 협의하여 결정한다.

제23조 (공사대금 지급) ① “갑”은 공사의 기성부분 검사 또는 준공검사의 합격을 통지받은 날로부터 15일  이내에 당해 공사대금을 “을”에게 지급하여야 한다. 다만, 정부의 재정형편상 보조금 또는 융자금이 기성부분 검사 또는 준공검사의 합격통지일까지 배정되지 않았을 때에는 예산회계법에 의하여 당해 예산이 배정된 날로부터 15일 이내로 한다.

② “을”은 “갑”이 제1항의 규정에 의한 기간 내에 공사대금을 “을”에게 지급하지 않는 경우에 “을”은 “갑”에게 공사대금 미지급으로 인한 손해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

③ “갑”은 “을”에게 미지급금액 및 손해금액에 대하여 회현농협의 일반대출 시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 지급하여야 한다.

제24조 (공사대금 지급절차) ① 제20조 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 “갑”은 시장·군수에게 보조금 교부신청을 하여야 하며, 대출금 실행을 위한 절차를 밟아야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 보조금 교부신청을 받은 시장·군수는 “갑”의 통장에 입금되어 있는 사업비 중 보조금 범위 내에서 “갑”의 위임을 받아 “을”의 통장으로 이체될 수 있도록 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 이 경우 “갑”은 제2항의 규정에 의한 공사대금의 계좌이체를 위하여 인감을 첨부한 지급위임장을 시장·군수에게 제출하여야 한다.

④ 제21조 제1항의 규정에 의한 검사합격 통지를 받은 “을”은 시장·군수가 계좌이체코자 하는 금액의 세금계산서 및 입금표를 시장·군수에게 제출하여야 한다.

⑤ 공사대금 지급이 완료된 때에는 시장·군수는 제4항의 규정에 의한 세금계산서 및 입금표를 “갑”에게 이관시켜야 한다.

⑥ 공사대금 중 “갑”의 자부담액 및 융자금과 보조금 중 시·도지사 또는 시장·군수가 “을”의 통장에 이체하지 않은 대금은 “갑”이 직접 “을”에게 지급한다.

⑦ 공사대금 중 100분의 10은 준공 후 정상가동 확인 후 지급한다.

제25조 (선급금 지급) 선급금지급은 농협계약사무처리준칙제57조에 따른다.

제26조 (선급금 반환) “을”은 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제25조 제1항의 규정에 의하여 지급받은 선급금의 잔액에 은행에 일반대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 가산하여 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다.

제27조 (하자담보 및 하자보수) ① “을”은 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 준공검사 후 그 공사대금의 잔액을 지급받을 때까지 현금 또는 전문건설공제조합 등의 보증서로 “갑”에게 납부하여야 한다.

② “을”은 준공검사를 마친 날로부터 계약서에 정해진 하자보수 의무기간 중의 귀책 사유로 하자가 발생한 것에 대하여는 이를 보수하여야 한다.

③ “을”이 제2항의 규정에 의한 하자보수 의무기간 중 “갑”으로부터 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하거나 단체협약에 의한 사후봉사를 받지 못하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수 보증금 중에서 당해 하자보수에 소요된 비용은 “갑”에게 귀속시킨다.

④ 제1항의 하자보수보증금은 하자보수 의무기간이 종료한 후 “을”의 청구가 있는 날로부터 15일 이내에 반환하여야 한다.

⑤ 공사에 대한 하자가 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 “을”의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생된 것일 때에는 “을”은 그 책임을 지지 아니한다.

제28조 (이행 지체) ① “을”은 계약서에서 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 못하였을 때는 매 지체 일수마다 계약서에서 정한 지체 상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액 (이하 “지체상금”이라 한다)을 “갑”에게 현금으로 납부하여야 한다.

② 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 공사가 지체되었을 때에는 그 해당일수에 상당한 지체상금을 면제한다.

1. 천재지변, 전쟁, 항만봉쇄, 방역 및 보안상 출입제한 등으로 인한 경우

2. “갑”의 귀책사유로 인하여 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우

3. 기타 “을”의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

③ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금을 “을”에게 지급하여야 할  공사대금 또는 기타 예치금에서 공제할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때에는 특별한 사유가 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 “계약보증금을 ”갑“에게 귀속시킬 수 있다.

제29조 (“갑”의 계약해제) ① “갑”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “을”이 정당한 사유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우

2. “을”의 귀책사유로 공기 내에 공사를 완성할 수 없음이 명백히 인정될 때

3. “을”이 계약조건을 위반하여 그 위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

② 제1항의 각호의 사유로 계약을 해제 또는 해지한 경우에 계약보증금은 “갑”에게 귀속한다.

③ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지함으로써 발생한 손해금액이 제2항의 규정에 의한 계약 보증금액을 초과할 경우에 “을”에게 그 초과분에 대한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

④ “갑”은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하고자 할 때에는 그 뜻을  미리 “을”에게 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 제4항의 규정에 의한 통지를 받았을 때에는 다음 각호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 해약통지서를 받은 부분에 대한 공사를 지체 없이 중지하고 모든 공사기구들을 공사장으로부터 철거한다.

2. 제15조의 규정에 의한 대여품이 있을 때에는 지체 없이 “갑”에게 반환하여야 한다. 이 경우 당해 대여품이 “을”의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 “을”은 당해 대여품을 원상 회복하여 주거나 또는 “갑”에게 그 손해를 배상하여야 한다.

제30조 (“을”의 계약해지) ① “을”은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “갑”이 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 40/100 이상 감소된 때

2. “을”의 귀책사유 없이 공사의 정지기간이 전체 공사기간의 20/100을 초과한 때

3. “갑”이 정당한 사유 없이 계약내용을 이행하지 아니하고 그 위반으로 인하여 공사를 완성하는 것이 불가능한 때

② “을”은 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인한 손해가 발생한 때에는  “갑”에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제31조 (채권 양도) “을”은 이 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권 (공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

제32조 (서류 제출) “갑”은 도급공사비의 입금, 산업재해보상 보험금의 지급, 요양 등에 관한 서류에 대하여 “을”의 협조 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제33조 (안전관리) 산업재해보험은 산업재해보상보험법에 의하여 “을”이 가입함을 원칙으로 하며, 시공에 있어서 재해 방지를 위하여 만전을 기한다.

제34조 (특수조건) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 “을”이 대등한 지위에서 합의하여 특약으로 정할 수 있다.

② 이 계약에서 공사의 범위는 설계도상의 시설물로 한한다.

제35조 (준용) 농축산순환자원화센터 공사도급 표준계약조건에 규정되지 아니한 부분은 농협 공사계약 일반조건을 준용한다. 끝.